중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	여자만 연안생태 휴양마을 조성
② 추진배경	급증하는 관광수요를 여자만권역의 풍부한 생태관광자원인 여자만 갯벌, 섬, 낙조 등과 연계한 연안 생태휴양마을 개발로 관광거점화 하여 지역사회와 지역주민들의 소득 향상
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 소라면 복산리 일원 ○ 사 업 량 - 궁항마을 : 쌈지마당조성, 골목길, 선착장 등 - 섬달천마을 : 휴게쉼터, 정소공원, 골목길 등 ○ 사 업 비 : 5,000백만 원(국비 2,500/ 시비 2,500) ○ 공사기간 : 2015. ~ 2019.(5년간)
④ 사업부서	여수시 관광과		⑤ 담당자		시설7급 서병국 행정5급 김학섭
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘14. 9. ~‘19.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 여자만 생태관광자원 개발계획 수립		‘13. 6.		김충석 시장 이호경 부시장 이노철 국장 강승원 과장 송신현 팀장 김동언 주무관
○ 여자만 연안생태휴양마을 조성사업 추진계획 수립 ※ 관광과-10973호		‘14. 7.16.		주철현 시장 이호경 부시장 이노철 국장 강성원 과장 김상태 팀장 한상범 주무관
○ 여자만 연안생태휴양마을조성사업 추진계획 수립(실시설계) ※ 관광과-16135호		‘15. 9. 9.		주철현 시장 이승옥 부시장 김광중 국장 김재일 과장 오정환 팀장 김대성 주무관

○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 시행 ※ 관광과-11531호	‘17. 5.25.	최종선 부시장 김광중 국장 김재일 과장 김용우 회계과장 장지문 계약2팀장 박성식 팀장 황용순 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 일시 정지 - 행정절차 지연 및 설계변경 ※ 관광과-19440호	‘17. 8.29.	김광중 국장 박명윤 과장 장지문 계약2팀장 박성식 팀장 황용순 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 일시 정지 해지 및 설계변경 ※ 관광과-24602호	‘17.11. 9.	김광중 국장 박명윤 과장 장지문 계약2팀장 박성식 팀장 황용순 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 변경계약 의뢰 - 누락자재 반영 등 ※ 관광과-1711호	‘18. 1.30.	박명윤 과장 박성식 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 일시 정지 - 관광복합센터 부지확보 지연 ※ 관광과-5011호	‘18. 3.20.	김병완 국장 박명윤 과장 장두한 회계과장 홍주성 계약2팀장 박성식 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 일시 정지 해지 및 변경계약 ※ 관광과-11526호	‘18. 6.19.	김병완 국장 박명윤 과장 장두한 회계과장 홍주성 계약2팀장 박성식 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 사업계획 변경신청 (여수시→전남도) - 사업비, 사업내용 등 ※ 관광과-15035호	‘18. 8.10.	박명윤 과장 오병구 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 일시 정지 ※ 관광과-20135호	‘18.11. 1.	고재익 국장 박명윤 과장 오병구 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 일시 정지 해지 ※ 관광과-10090호	‘19. 5.27.	고재익 국장 김학섭 과장 최종춘 팀장 서병국 주무관

○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 정주어항 점․사용 허가 신청 ※ 관광과-11303호	‘19. 6.12.	김학섭 과장 최종춘 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 물가변동에 의한 계약금액 조정 검토보고 ※ 관광과-16599호	‘19. 8.26.	고재영 부시장 김용필 국장 한숙영 계약심사팀장 오병구 계약2팀장 김학섭 과장 최종춘 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 공기연장 검토보고 ※ 관광과-19134호	‘19.10. 4.	김용필 국장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 김학섭 과장 최종춘 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 화장실 설치에 따른 급수 신청 ※ 관광과-20622호	‘19.10.29.	김학섭 과장 최종춘 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 화장실 전기공사 시행 ※ 관광과-21675호	‘19.11.15.	김학섭 과장 최종춘 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 변경계약 의뢰 ※ 관광과-21967호	‘19.11.20.	김학섭 과장 최종춘 팀장 서병국 주무관
○ 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업 준공	‘19.12.10.	김학섭 과장 최종춘 팀장 서병국 주무관