11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투자심사 대상사업

				(단위 : 백만원, %)
사 업 명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
여서동 주민(자치)센터 신축 - 도심사	3,680		680	3,000	2015	2014	50%
연등천 차집관로 정비 - 도심사	9,000		300	8,700	2016	2014	5%
돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리지역 정비 - 중앙심사	21,769		1,500	20,269	2017	2014	5%
제15회 여수국제청소년축제 - 도심사	800		800			2014	100%
율촌제1산단～율촌면소재지도로개설 - 자체심사	8,700	1,200	1,200	6,300	2019	2014	5%
2014여수국제해양포럼 - 자체심사	300		300	-	2014	2014	100%
둔덕정수장 고도정수처리시설 설치 - 중앙심사	44,600	1,874	1,314	41,412	2018	2014	5%
여수 밤바다의 문화도시 조성 - 중앙심사	3,750		750	3,000	2019	2014	60%
학용정수장 고도정수처리시설 설치 - 도심사	18,365	985	514	16,866	2018	2014	5%
제19차 세계한인경제인대회 - 도심사	884		884	-	2014	2014	100%
웅천~문수주공A 도로확장 - 자체심사	3,200		200	3,000	2018	2014	5%
산단로(삼동~남수) 도로확장 - 자체심사	5,550	1,050	1,050	3,450	2017	2014	5%
묘도 창촌 도시계획도로 개설 - 자체심사	6,000	1,000	1,000	4,000	2017	2014	30%

우리 여수시에서 ‘14년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

여서동 주민센터 신축공사-도심사

담당자

회계과 김희영(☎659-3221)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1988년 건립된 건물로 노후 및 균열‧누수 등으로 유지비 증가

○ 여서지구 인구증가에 따른 행정수요 확대

○ 주민활용 공간제공과 직원의 쾌적한 근무여건 및 양질의 서비스제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 여수시 여서동 386번지

○ 공사개요

가. 대지면적 :  843.8㎡

나. 건축면적 :  458.16㎡

다. 연 면 적 : 1,743.12㎡(지상4층/1동)

라. 구    조 : 철근콘크리트조

마. 용    도 : 공공업무시설

○ 사업기간 : 2015. 3. 26. ~ 2015. 10. 21.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	3,680		680	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 50%)

○ 2014.  3. 22. : 지방재정 투자사업 심사 승인

○ 2014.  4.  3. : 공유재산관리계획 의결(원안가결)

○ 2014. 10. 30. : 설계용역 착수

○ 2015.  2. 11. : 설계용역 완료

○ 2015.  2. 26. : 일상감사 및 계약심사 완료

○ 2015.  3. 26. : 착공

□ 향후계획

○ 2015. 10. 21. : 공사완료

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

연등천 차집관로 시설공사 - 도심사

담당자

하수도과 박가영(☎659-4986)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 하수 차집관로의 노후화 및 불량으로 공공하수처리 시설에 다량의 불명수 유입에       따른 근본적인 문제 해결로 운영비 절감

□ 사업개요

○ 기 간 :  2015. ~ 2017.

○ 위 치 :  연등천 연등중계펌프장 ~ 문수삼거리

○ 규 모 :  차칩관로 신설∙정비 L=3.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	9,000		300	714	7,986
국 비	6,300			500	5,800
시 도 비
시군구비	2,700		300	214	2,186
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘14. 10. 17 : 총사업비 확정 가내시

○ ‘14. 11. 13. : 용역 착수

□ 향후계획

○ ‘15. 10. : 용역 준공

○ ‘15. 12. : 공사 착공

○ ‘16. 12. : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리지역 정비사업 - 중앙심사

담당자

하수도과 정상기(☎659-4991)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우 시 돌산읍 우두리 일원 저지대 지역의 하수가 해안으로 원활하게 배출되지 않아       침수피해가 발생하므로 배수처리 시설을 설치하고 관로를 정비하여 침수피해 사전예방

□ 사업개요

○ 기 간 :  2015. ~ 2017.

○ 위 치 :  여수시 돌산읍 우두리 일원

○ 규 모 :  1) 하수저류시설 4,200㎥ 2개소

2) BOX 확장(W4.0m × H2.5m) L=1,161m

3) 관로확장(D1200) L=1,069m

4) 관로신설 및 확장(D600) L=1,000m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	21,770		1,500	6,530	13,740
국 비	15,240			4,570	10,670
시 도 비
시군구비	6,530		1,500	1,960	3,070
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ ‘13. 12. 26. : 환경부 중점관리지역 선정 통보

○ ‘14.  4. 18. : 지방재정 투자사업 심사 완료(중앙)

○ ‘14.  9.  2. : 일상감사 및 계약심사 완료

○ ‘15.  1. 23. : 용역 계약 및 착공

○ ‘15.  7. 28. : 용역 일시정지 / 각종 행정절차 이행

□ 향후계획

○ ‘15.  8. ~ 9.  : 하수도정비대책 수립 승인 완료(도, 환경부)

○ ‘15.  9.       : 재원조달 및 사용에 관한 협의(환경부)

○ ‘15. 10.       : 도시관리계획결정(qusurd), 공공하수도설치인가 등 인허가 행정절차 수행

○ ‘15. 11. ~ ‘17. 12. : 사업추진

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2014 여수국제청소년축제 - 도심사

담당자

관광과 위회환(☎659-4742)

□ 축제목적 및 필요성

○ 청소년 대표적인 축제로 국제적인 안목을 넓히고 숨겨진 끼와 재능을 마음껏 발휘할 수 있는 기회의 장 마련

○ 해양관광의 허브도시 여수의 국제적 인지도 확산의 계기 마련

□ 축제개요

○ 기 간 :  2014. 7. 29 ~ 2014. 8. 3

○ 장 소 : 여수세계박람회장 및 여수시 일원

○ 참 여 : 22,000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	800		800
국 비	400		400
시 도 비	200		200
시군구비	200		200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ ‘14.  5. 14 : 기본계획수립

○ ‘14.  7. 17 : 국제교류 참가자 확정

○ ‘14.  7.  29. ~ 8. 3 : 축제개최

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

율촌 제1산단~율촌면소재지

도로개설 - 자체심사

담당자

도로과 황용순(☎659-4071)

□ 사업목적 및 필요성

○ 율촌1산단과 인접한 진입도로가 없어 산단종사자의 접근 기피로 교통불편 초래

○ 율촌면 주거지 접근성 향상으로 교통통행 불편해소 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 2. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 율촌면 조화리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L= 1.03㎞, B= 14m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,500	1,200	1,200	500	5,800
국 비
시 도 비
시군구비	7,500	1,200	1,200	500	5,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역 착수                  : 2014.  2.26.

○ 지방재정 투자심사                  : 2014.  7.17.

○ 실시설계용역 준공                  : 2015.  5.29.

□ 향후계획

○ 편입토지 보상 협의                 : 2015. 12.

○ 공사착공                           : 2016.  3.

○ 공사준공                           : 2019. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2014여수국제해양포럼 - 자체심사

담당자

박람회활용과 김희신(☎659-3469)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수프로젝트 시범사업의 성과 확산 및 국제사회의 참여와지지 유도 계기 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 10. 23. ~ 10. 24.

○ 위 치 : 박람회장 내 엑스포홀

○ 규 모 : 해양관련 전문가 및 일반시민 500여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	300	-	300	-	-
국 비	260	-	260	-	-
시 도 비	20	-	20	-	-
시군구비	20	-	20	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014여수국제해양포럼 지원 요청(한국해양과학기술원) : 2014. 7. 2

○ 2014여수국제해양포럼 지원계획 수립                : 2014. 7. 9

○ 2014여수국제해양포럼 준비회의 참석                : 2014. 7. 30.

○ 2014여수국제해양포럼 행정지원계획 수립            : 2014. 10. 15.

○ 2014여수국제해양포럼 개최                         : 2014. 10. 23. ~ 10. 24.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

둔덕정수장 고도정수처리시설 설치
- 중앙심사

담당자

상수도과 한상범(☎659-4908)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급속여과 방식으로 정수처리를 하고 있으나 바이러스․세균, 내염소성병원성 미생물 등이       제거되지 않아

○ 막여과 처리방식인 고도정수처리사업을 시행하여 시민들에게 깨끗한 수질의 수돗물을       공급하여 시민의 건강증진 및 상수도 물에 대한 시민의 신뢰도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1 ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 여수시 둔덕정수장 일원

○ 규 모 : 막여과시설 92,000㎥/일, 정배수지 7,200㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,600 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	44,600	1,874	1,314	1,000	40,412
국 비	26,100	1,312	920	700	23,168
시 도 비
시군구비	18,500	562	394	300	17,244
지 방 채				-	-
민간자본				-	-
기 타				-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ '14.  6.  : 기본 및 실시설계 완료

○ ‘14. 10.  : 지방재정투자심사 변경승인

○ ‘15.  3.  : 계약심의회 심의

□ 향후계획

○ ‘15.  8.   : 계약 및 착공

○ ‘18. 12.   : 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

여수 밤바다의 향기와 매력이 있는 문화도시 조성 - 중앙심사

담당자

문화예술과 김경호(☎659-4693)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심의 여수밤바다에 매력적인 거리문화콘텐츠를 적용하여 원도심을 활성화시키고         문화관광의 중심지로 육성하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1월 ~ 2019. 12월(5년간)

○ 위 치 : 여수시 원도심 일원(종화동, 중앙동)

○ 규 모 : 거리문화공연 외 2건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,750			750	3,000
국 비	1,500		-	300	1,200
시 도 비
시군구비	2,250		-	450	1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 거리문화공연 운영 : 총22주 중 9주 추진 완료

○ 예술인 창작 공간 조성 완료

○ 거리문화공연장 소규모 음향시스템 설치 완료

□ 향후계획

○ 거리문화공연 운영(13주)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

학용정수장 고도정수처리시설 설치
- 도심사

담당자

상수도과 한상범(☎659-4908)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급속여과 방식으로 정수처리를 하고 있으나 바이러스․세균, 내염소성병원성 미생물 등이       제거되지 않아

○ 막여과 처리방식인 고도정수처리사업을 시행하여 시민들에게 깨끗한 수질의 수돗물을       공급하여 시민의 건강증진 및 상수도 물에 대한 시민의 신뢰도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1 ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 여수시 학용정수장 일원

○ 규 모 : 막여과시설 42,000㎥/일, 배출수지 1,500㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,365 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	18,365	985	514	571	16,295
국 비	11,141	690	360	400	9,691
시 도 비
시군구비	7,224	295	154	171	6,604
지 방 채				-	-
민간자본				-	-
기 타				-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ '14.  6.  : 기본 및 실시설계 완료

○ ‘14. 10.  : 지방재정투자심사 변경승인

○ ‘15.  3.  : 계약심의회 심의

□ 향후계획

○ ‘15.  8.   : 계약 및 착공

○ ‘18. 12.   : 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제19차 세계한인경제인 대회 - 도심사

담당자

지역경제과 신정임(☎659-3603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해외동포 바이어를 초청하여 지역 중소기업 수출상담회, 투자환경 설명회 등을 통해         수출 진흥 및 경제 네트워크 도모

○ 우리시 홍보 및 박람회 직.간접 시설의 사후활용으로 관광산업 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014. 9. 29.(월) ~ 10. 2.(목) / 3박 4일

○ 장    소 : 여수세계박람회장

○ 참가규모 : 1,000여명(Wold-Okta 67개국, 126개 지회 회원 및 참여 중소기업 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  884백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	884	0	884	0	0
국 비
시 도 비	100		100
시군구비	200		200
지 방 채
민간자본	584		584
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전남도 지방재정 투‧융자 심사 완료           : ’14. 3. 21. / 10. 30. (2회)

○ 대회참가 신청‧접수, 홍보, 행사 프로그램 확정 : ’14. 6.~8월

○ ’14년 제1회 추경예산 확보(시비 1억원)       : ’14. 8.

○ 제19차 세계한인경제인대회 개최             : ’14. 9. 29. ~ 10. 2.

□ 향후계획

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

웅천~문수주공A 도로확장 - 자체심사

담당자

도로과 강성욱(☎659-4072)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로병목 현상으로 출퇴근시 극심한 교통체증 발생

○ 웅천지구와 연결되는 주 간선도로의 선형개량으로 교통사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015~2018

○ 위 치 : 문수주공A 건너편

○ 규 모 : 선형개량 L= 200m, B= 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,200		200		3,000
국 비
시 도 비
시군구비	3,200		200		3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정 투자심사                  : 2014. 10.30.

○ 실시설계용역 착수                  : 2015.  2.23.

○ 실시설계용역 준공                  : 2015.  6.22.

□ 향후계획

○ 공사착공                           : 2016.  3.

○ 공사준공                           : 2018. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산단로(삼동~남수) 도로확장 - 자체심사

담당자

도로과 황용순(☎659-4071)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수국가산단 진입부 병목구간 정체로 출퇴근 차량불편 초래

○ 사회기반시설 확충으로 물류비용 절감 및 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015~2017

○ 위 치 : 월하동 1141번지 일원

○ 규 모 : 도로확장 L= 700m, B= 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,500	1,050	1,050	1,000	2,450
국 비
시 도 비
시군구비	4,500	1,050	1,050	1,000	2,450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역 준공                   : 2014.  7.17.

○ 공사착공                            : 2015.  5.26.

□ 향후계획

○ 편입토지 보상 협의                 : 2015.  8.

○ 공사준공                           : 2017. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

묘도 창촌 도시계획도로 개설
- 자체심사

담당자

도로과 강성욱(☎659-4072)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 긴급 재난대비 및 주민교통편의 제공

○ 도시기반시설 확충으로 주거밀집지역 주민생활 환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2016

○ 위 치 : 묘도동 1967-1번지일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1,200m B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,000	1,000	1,000	1,240	2,760
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	1,000	1,000	1,240	2,760
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 지방재정 투자심사                  : 2012. 10.23.

○ 실시설계용역 완료                  : 2014. 2.21.

○ 보상 협의 중                       : 2015. 7.현재

□ 향후계획

○ 편입토지 보상 협의                 : 2015. 12.

○ 공사착공                           : 2016.  3.

○ 공사준공                           : 2017. 12.

11-2. 지방채 발행사업

우리 여수시에서 ‘14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
웅천택지개발사업	619,300	12,500	-	-	606,800	-	12,500	89.1
여수국가산단 주변마을 주민이주사업	578,634	114,800	273,121	24,700	154,017	11,996	114,800	85

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

웅천택지개발사업

담당자

공영개발과 이광재(☎659-4575)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인간과 자연이 공존하는 친환경적 신개념 도심 조성

○ 근로자가 정주할 수 있는 주택용지 공급으로 인구 유출 최소화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2004. 4.  ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 여수시 웅천동 일원

○ 규 모 : 2,800천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  619,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	619,300	488,381	37,823	93,096	-
지 방 채	12,500	12,500	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	606,800	475,881	37,823	93,096	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 89.1%)

○ 택지개발사업 실시계획 승인․고시                 : ‘04. 04. 27.

○ 총괄 및 1단계 사업 착공                        : ‘04. 04. 27.

○ 3단계 사업 착공                                : ‘08. 12. 26.

○ 1단계 사업 준공 인가                            : ‘10. 11. 25.

○ 2단계 사업 착공                               : ‘11. 04. 01.

□ 향후계획

○ 2․3단계 공사 준공                               : ‘15. 12.

○ 지적공부 정리 완료                             : ‘16. 06.

○ 웅천택지개발사업 준공                          : ‘16. 12.

사업명

여수국가산단 주변마을 주민 이주사업

담당자

공영개발과 주영길(☎659-4581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수국가산단 주변 마을 거주 주민들을 공해와 산업재해로부터 보호하고자 인근

택지개발지구로 이주시키고

○ 이전적지에 입주기업을 유치, 지역경제 활성화와 인구증가 시책에 기여하고자 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘04. 7. 27. ～ ’16. 12. 31.

○ 위 치 : 여수시 월하․평여, 두암․적량, 중흥, 삼동

○ 규 모 : 5개동 6개마을 1,791세대 5,956명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  578,634백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	578,634	532,531	10,918	1,185	34,000
지 방 채	114,800	114,800	-	-	-
국비(특교)	273,121	273,121	-	-	-
시 도 비	24,700	24,700	-	-	-
시군구비	154,017	107,914	10,918	1,185	34,000
기 타	11,996	11,996	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 연관단지 개발계획 승인                   : ‘01. 12. 28.

○ 월하․평여 조성공사 준공                   : ‘04. 07. ~ ’07. 05.

○ 두암 조성공사 준공                       : ‘05. 07. ~ ’08. 09.

○ 중흥지구 공사 준공                       : ‘14. 06.

□ 향후계획

○ 국가산단 개발계획 변경 승인․고시          : ‘15. 08.

○ 실시계획 승인 및 중흥, 삼동지구 토지 보상 : ‘15. 09. ~ ’16. 04.

○ 부지조성 공사 시행                        : ‘16. 05. ~ ’18. 12.

11-3. 민간투자사업

우리 여수시에서 ‘14년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’13년까지 부담액	’14년 부담액	’15년 이후 부담 예정액
BTL	'05년도 하수관거정비	푸른여수 지키미(주)	38,662	16,988	4,548	68,845	‘06.7.31~’10.3.30
	‘08년도 하수관거정비	여수맑은물사랑(주)	45,596	-	5,062	110,986	‘10. 12.14 ~‘14.2.13
BTO	음식물자원화시설설치사업	㈜여수 엑스포환경	8,349	6,819	2,067	26,600	’10. 1. ~ ’25. 1.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2014년까지는 집행액(결산기준), 2015년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 하수관거정비사업

○ 민간사업자가 관리운영권 행사의 방법으로 약정한 기간 동안 지자체 등에 시설을    임대하고, 약정된 임대료 수입을 통해 투자비 회수(국비 70%, 시비 30%)

○ 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

○	시설임대료 = 총민간투자비	×	수익률
			1-(1+수익률)-(임대기간)

☞ 음식물자원화시설설치사업

○ BTO 사업의 재정부담액은 연간 음식물 처리량에 톤당 단가를 곱한 금액 임. 매년 일정 규모의 사용료가 지출 되므로 재정 부담이 큼.

※ 15년 이후 연간 처리량은 14년 처리량을 대입했으며, 톤당 단가는 소비자물가지수 평균 변동률(2.3%)을 적용함.

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

‘05년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과 박가영(☎659-4986)

□ 사업개요

○ 기간 : 2006.07.31~ 2010.03.30

○ 위치 : 6개처리 분구(학동, 화장, 신월, 여도, 둔덕, 세구지)

○ 민간사업자 : 푸른여수지키미(주)

○ 총사업비 : 38,662백만원

○ 사업규모 : L=47.7㎞, 배수설비 4,036개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익 보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자액	2014연도	2015연도	2016년 이후
계	90,381	16,988	4,548	4,548	64,297
국 비	57,230	10,907	2,907	2907	40,509
시 도 비
시군구비	33,151	6,081	1,641	1,641	23,788
기 타

□ 추진단계

○ 운영기간 : 2010. 03 ~ 2030. 03(20년)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

‘08년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과 박가영(☎659-4986)

□ 사업개요

○ 기  간 : 2010.12.14.~ 2014.2.13

○ 위  치 : 6개처리분구(연등, 여서, 웅천, 여천, 소호, 수정)

○ 민간사업자 : 여수맑은물사랑(주)

○ 총사업비 : 45,596백만원

○ 사업규모 : L=34.76㎞, 배수설비 4,403개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자액	‘14연도	‘15연도	‘16년 이후
계	116,048		5,062	5,772	105,214
국 비	71,288		3,129	3,564	64,595
시 도 비
시군구비	44,760		1,933	2,208	40,619
기 타

□ 추진단계

○ 운영기간 : 2014. 03 ~ 2034. 03(20년)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

여수시 음식물자원화시설 설치 사업

담당자

도시미화과 정종군(☎659-3848)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내에서 발생하는 음식물류 폐기물의 안정적 처리

○ 음식물류 폐기물의 자원재활용(퇴비 생산)으로 환경오염 방지

□ 사업개요

○ 기간 : 2008. 8. ~ 2010. 1(신설)/ 2012. 2. ~ 2012. 4.(증설)

○ 위치 : 여수시 진달래길 310-157(월내동)

○ 민간사업자 : (주)엑스포환경

○ 총사업비 : 8,349(백만원)

○ 사업규모 : 75톤(‘12년 15톤 증설 포함)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 세후 실시 수익률 5.41%/ 2010. 1. 15. ~ 2025. 1. 14.(운영기간 15년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	35,485	6,819	2,067	2,153	24,446
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시 비	35,485	6,819	2,067	2,153	24,446
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시설 운영 중

□ 향후계획

○ 2025. 1. 14.까지 음식물자원화시설 민간사업자 운영(사용료 지급)

○ 사용료는 매년 물가상승분 반영(‘14년 사용료 : 79,728원/톤)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 변경 : 당초 60톤 → 75톤(‘12년 4월 준공)

- 사업비(18억원) 전액 민간사업자 부담