정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	웅천 애시앙 아파트 앞 육교 설치공사
② 추진배경	웅천 예울초등학교 학생들의 안전한 통학로 확보 등
③ 사업개요	위 치 : 웅천로 262 일원 사 업 량 : 보도육교 설치 L=48.0m, B=3.0m 사 업 비 : 2,488백만원(도급 1,407, 관급 1,074, 폐기물 7)
④ 사업부서	도로시설관리과		⑤ 담당자	시설5급 임기형 시설7급 백종환
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업		⑦ 사업기간	`24.12.12.~`25.12.11.
<그간 주요 추진내용>
○ 육교설치 검토보고(방침결정) ※ 도로시설관리과-20224호(’23.8.23.)		‘23.8.23.	정기명 시장 김종기 부시장 김병완 국장 서은주 팀장 박형열 과장 정수환 과장 김인옥 과장 박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관
○ 실시설계용역 시행 ※ 도로시설관리과-31704호(’23.12.27.)		‘23.12.27.	김병완 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 박성식 과장 조정선 팀장 최민석 주무관
○ 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 요청 ※ 도로시설관리과-1047호(’24.1.11.)		‘24. 1.11.	박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-486호(’24.1.15.)		‘24. 1.15.	한상범 주무관
○ 실시설계용역, 지반조사용역 계약의뢰 ※ 도로시설관리과-1671호(’24.1.19.)		‘24. 1.19.	박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관

○ 실시설계용역 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 회계과-7347호(’24.2.15.)	‘24. 2.15.	한상범 주무관
○ 실시설계용역 착수계 제출 ※ 도로시설관리과-4608호(’24.2.23.)	‘24. 2.26.	박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관
○ 실시설계용역 선금지급 결정 ※ 회계과-13549호(’24.3.20.)	‘24. 3.20.	한상범 주무관
○ 실시설계용역 책임기술자 변경 검토요청 ※ 회계과-21796호(’24.4.29.)	‘24. 4.29.	한상범 주무관
○ 실시설계용역 책임기술자 변경 검토보고 및 회신 ※ 도로시설관리과-10970호(’24.5.1.)	‘24. 5. 1.	박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관
○ 주민설명회 참석요청 ※ 도로시설관리과-10971호(’24.5.1.)	‘24. 5. 1.	박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관
○ 지반조사용역 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-25011호(’24.5.16.)	‘24. 5.16.	한상범 주무관
○ 지반조사용역 착수계 제출 ※ 도로시설관리과-12245호(’24.5.14.)	‘24. 5.14.	김은숙 팀장 한상범 주무관
○ 상부거더 신기술·특허공법 적용 검토보고 ※ 도로시설관리과-14510호(’24.6.7.)	‘24. 6. 7.	김종기 부시장 이동일 단장 강행숙 과장 우희원 팀장 박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관
○ 상부거더 신기술·특허공법 선정 운용계획 ※ 도로시설관리과-15422호(’24.6.17.)	‘24. 6.17.	이동일 단장 박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관
○ 상부거더 신기술·특허공법 제안서 제출안내 공고 ※ 도로시설관리과-15444호(’24.6.17.)	‘24. 6.17.	박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관
○ 상부거더 신기술·특허공법 선정위원회 개최 계획 ※ 도로시설관리과-16006호(’24.6.20.)	‘24. 6.20.	이동일 단장 박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관

○ 상부거더 신기술·특허공법 선정위원회 개최 결과 공고 ※ 도로시설관리과-17136호(’24.7.2.)	‘24. 7. 2.	박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 검토보고 ※ 도로시설관리과-2504호(’24.7.30.)	‘24. 7.30.	이동일 국장 강행숙 과장 양동안 팀장 박성식 과장 조정선 팀장 한상범 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 알림 ※ 회계과-41445호(’24.7.30.)	‘24. 7.30.	한상범 주무관
○ 경관심의 신청(1차) ※도로시설관리과-2984호(’24.8.2.)	‘24. 8. 2.	하경아 팀장 한상범 주무관
○ 지반조사용역 준공계 제출 ※ 도로시설관리과-3591호(’24.8.8.)	‘24. 8. 8.	조정선 팀장 한상범 주무관
○ 경관심의 재신청(2차) ※도로시설관리과-6511호(’24.9.6.)	‘24. 9. 6.	박성식 과장 조정선 팀장 김희곤 주무관
○ 경관심의 재신청(3차) ※도로시설관리과-9070호(’24.10.7.)	‘24.10. 7.	박성식 과장 조정선 팀장 김희곤 주무관
○ 웅천 더힐 1단지 앞 육교 설치공사 일상감사 및 계약심사 요청 ※도로시설관리과-12877호(’24.11.14.)	‘24.11.14.	박성식 과장 조정선 팀장 김희곤 주무관
○ 웅천 더힐 1단지 앞 육교 설치공사 일상감사 및 계약심사 결과 알림 ※감사담당관-12214호(’24.11.19.)	‘24.11.19.	김희곤 주무관
○ 방침 결정(시행계획 보고) ※ 도로시설관리과-13683호(’24.11.22.)	‘24.11.22.	정기명 시장 최정기 부시장 이동일 국장 박성식 과장 조정선 팀장 김희곤 주무관
○ 계약의뢰 ※ 도로시설관리과-13724호(’24.11.22.)	‘24.11.22.	하경아 팀장 조정선 팀장 김희곤 주무관
○ 착공계 제출(총괄 및 1차분) ※ 우성종합개발(주)-M00036-053441호(’24.12.13.) ※ 도로시설관리과-16170호(’24.12.16.)	‘24.12.16.	조정선 팀장 김희곤 주무관

○ 설계변경 검토보고(1차분 1회) ※ 도로시설관리과-16170호(’24.12.16.)	‘24.12.16.	최정기 부시장 이동일 국장 강행숙 과장 정일권 팀장 박성식 과장 조정선 팀장 김희곤 주무관
○ 설계변경 의뢰(1차분 1회) ※ 도로시설관리과-16715호(’24.12.20.)	‘24.12.20.	하경아 팀장 김희곤 주무관
○ 설계변경(1차분 1회) 계약체결 알림 ※ 회계과-68654호(’24.12.24.)	‘24.12.24.	김희곤 주무관
○ 1차분 선금지금 결정 알림 ※ 회계과-2406호(’25.1.15.)	‘25. 1.15.	백종환 주무관
○ 시공단계의 건설사업관리계획 수립 제출 ※ 도로시설관리과-1772호(’25.1.20.)	‘25. 1.20.	임기형 과장 조정선 팀장 백종환 주무관
○ 전기공사 시행 ※ 도로시설관리과-호(’24.11.22.)	‘25. 2. 3.	최연호 국장 김종필 과장 양동안 팀장 임기형 팀장 조정선 팀장 신승민 주무관 백종환 주무관
○ 전기공사 계약의뢰 ※ 도로시설관리과-2780호(’25.2.4.)	‘25. 2. 4.	하경아 팀장 백종환 주무관
○ 경관심의 4차 신청 ※ 도로시설관리과-3234호(’25.2.10.)	‘25. 2.10.	임기형 과장 조정선 팀장 백종환 주무관
○ 일시정지 검토보고(총괄 및 1차분) ※ 도로시설관리과-4048호(’25.2.17.)	‘25. 2.17.	최연호 국장 한태광 팀장 양동안 팀장 임기형 과장 백종환 주무관
○ 일시정지 요청(총괄 및 1차분) ※ 도로시설관리과-4081호(’25.2.18.)	‘25. 2.18.	임기형 과장 조정선 팀장 백종환 주무관
○ 일시정지 알림(총괄 및 1차분) ※ 회계과-7368호(’25.2.18.)	‘25. 2.18.	백종환 주무관
○ 전기공사 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 회계과-8082호(’25.2.21.)	‘25. 2.21.	백종환 주무관

○ 녹지점용 허가 신청 ※ 도로시설관리과-4942호(’25.2.26.)	‘25. 2.18.	임기형 과장 조정선 팀장 백종환 주무관
○ 설계변경 심의요청(총괄 및 1차분) ※ 도로시설관리과-9729호(’25.4.10.)	‘25. 4.10.	하경아 팀장 조정선 팀장 백종환 주무관
○ 일시정지 해지 및 설계변경 검토보고(총괄 1회 및 1차분 2회) ※ 도로시설관리과-10261호(’25.4.15.)	‘25. 4.15.	최연호 국장 김종필 과장 양동안 팀장 하경아 팀장 조정선 팀장 백종환 주무관
○ 일시정지 해지 및 설계변경 의뢰(총괄 1회 및 1차분 2회) ※ 도로시설관리과-10507호(’25.4.16.)	‘25. 4.16.	하경아 팀장 조정선 팀장 백종환 주무관
○ 폐기물처리용역 시행 ※ 도로시설관리과-10630호(’25.4.17.)	‘25. 4.17.	하경아 팀장 백종환 주무관
○ 웅천 더힐 1단지 앞 육교 설치공사(2차분) 시행 ※ 도로시설관리과-11197호(’25.4.22.)	‘25. 4.22.	정기명 시장 최정기 부시장 최연호 국장 김종필 과장 양동안 팀장 하경아 팀장 백종환 주무관
○ 폐기물처리용역 계약의뢰 ※ 도로시설관리과-10641호(’25.4.17.)	‘25. 4.17.	하경아 팀장 백종환 주무관
○ 토사 및 식재발생 부지사용 협의(공영개발과) ※ 도로시설관리과-10674호(’25.4.17.)	‘25. 4.17.	하경아 팀장 백종환 주무관
○ 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림(총괄 및 1차분) ※ 회계과-11130호(’25.4.22.)	‘25. 4.22.	백종환 주무관
○ 웅천 더힐 1단지 앞 육교 설치공사(2차분) 계약의뢰 ※ 도로시설관리과-11205호(’25.4.22.)	‘25. 4.22.	하경아 팀장 백종환 주무관
○ 품질계획서 승인 검토보고 ※ 도로시설관리과-11455호(’25.4.24.)	‘25. 4.24.	하경아 팀장 백종환 주무관
○ 품질계획서 승인 통보 ※ 도로시설관리과-11459호(’25.4.24.)	‘25. 4.24.	하경아 팀장 백종환 주무관

○ 폐기물처리용역 착수계 제출 ※ 도로시설관리과-11600호(’25.4.25.)	‘25. 4.25.	한상근 팀장 백종환 주무관
○ 2차분 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 회계과-20663호(’25.4.28.)	‘25. 4.28.	백종환 주무관
○ 2차분 착공계 제출 ※ 도로시설관리과-12832호(’25.5.9.)	‘25. 5. 9.	조정선 팀장 백종환 주무관
○ 안전관리계획서 승인 검토보고 ※ 도로시설관리과-13963호(’25.5.19.)	‘25. 5.19.	임기형 과장 백종환 주무관
○ 안전관리계획서 승인 ※ 도로시설관리과-13981호(’25.5.19.)	‘25. 5.19.	임기형 과장 백종환 주무관
○ 안전점검 수행기관 선정계획 검토보고 ※ 도로시설관리과-14843호(’25.5.27.)	‘25. 5.27.	임기형 과장 백종환 주무관
○ 2차분 선급금 지급 알림 ※ 회계과-26244호(’25.5.27.)	‘25. 5.27.	백종환 주무관
○ 안전점검 수행기관 평가 결과보고 ※ 도로시설관리과-16688호(’25.6.13.)	‘25. 6.13.	하경아 팀장 백종환 주무관
○ 현장대리인 및 품질관리자 변경 검토 요청 ※ 회계과-29771호(’25.6.16.)	‘25. 6.16.	백종환 주무관
○ 현장대리인 및 품질관리자 변경 검토보고 ※ 도로시설관리과-16923호(’25.6.17.)	‘25. 6.17.	임기형 과장 백종환 주무관
○ 현장대리인 및 품질관리자 변경 검토회신 ※ 도로시설관리과-16962호(’25.6.17.)	‘25. 6.17.	임기형 과장 백종환 주무관