특수공시 사업 목록

(2024. 12. 31. 기준 / 단위 : 억 원)

사 업 명		부 서 명	총사업비	비 고
1.	소라면 죽림행정복합시설 건립	회계과	98	30%
2.	본청사 별관 증축 건립사업	회계과	622	15%
3.	여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립	산업지원과	123	23%
4.	오천산단 청년문화센터 건립	산업지원과	57	30%
5.	K-관광 섬 육성	관광과	110	60%
6.	사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발	관광과	360	10%
7.	여수시립박물관 건립	문화유산과	317	62.5%
8.	선소테마정원 조성	문화유산과	195	40%
9.	여수시 어린이도서관 건립	도서관운영과	130	10%
10.	원도심권 노인복지관 건립	노인장애인과	147	60%
11.	장기미집행 공원 조성(무선산공원, 자산공원)	공원과	748	86%
12.	연등천 재해예방	건설과	389	20%
13.	소제지구 택지개발	공영개발과	2,300	55%
14.	경도 해양관광단지 진입도로 개설	도로과	1,340	21%
15.	도성지구 농촌공간정비	농업정책과	180	5%
16.	지방상수도 현대화	상수도과	513	30%
17.	도원사거리 일원 하수도 정비	하수도과	214	50%
18.	문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비	하수도과	97	100% (’24. 5.)

01		소라면 죽림행정복합시설 건립

회계과 (☏ 061-659-3226)

실태		소라면 죽림지구 인구 증가에 대한 행정 지원 시설 필요
추진방향		건강복지 및 행정서비스 향상을 위한 죽림행정복합시설 건립
기대효과		복합건물(죽림출장소+건강생활지원센터) 신축으로 행정서비스 향상 기여

사업개요

◦ 위    치 : 여수시 소라면 죽림리 1170

◦ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2027. 2.

◦ 사업규모 : 지하1층~지상4층, 1개동, 연면적 1,885.67㎡

◦ 사 업 비 : 9,779백만 원

◦ 공 정 율 : 30%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	97.79	9.7	1.08	87.01
국 비	11.01	5	0.72	5.29
도 비	2.75	1.25	0.18	1.32
시 비	84.03	3.45	0.18	80.4
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 농어촌의료개선사업 공모 선정(보건복지부)	: ’22.  9. 19.

◦ 죽림행정복합시설 사업방침 결정	: ’22. 10.  4.

◦ 건축 설계공모 심사결과 발표(공고)	: ’24.  5. 14.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’24.  6.  3.

◦ 기본 및 실시설계 완료	: ’25.  6. 23.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

02		본청사 별관 증축 건립사업

회계과 (☏ 061-659-3221)

실태		여러개로 분산된 청사로 인한 시민불편 가중 및 행정 효율성 저하
추진방향		시민들에게 양질의 민원 서비스를 제공하고 공무원의 행정 처리 업무 효율성을 증대하기 위하여 본청사 별관 증축 건립
기대효과		행정기능 집중화를 통한 시민불편 해소와 행정력 낭비 최소화

사업개요

◦ 위    치 : 여수시 학동 100번지 일원

◦ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 2028. 2.

◦ 사업규모 : 지하2층 / 지상6층, 연면적 17,492㎡

◦ 사 업 비 : 62,246백만원

◦ 공 정 율 : 15%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	62,246	2	55	62,189
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	62,246	2	55	62,189
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 본청사 별관 증축 건립 계획 수립	: ’23.  3.  1.

◦ 타당성 조사 완료(행정안전부)	: ’23. 11. 29.

◦ 지방재정투자심사 완료(전라남도)	: ’24.  3.  6.

◦ 공유재산 관리계획 의결(시의회)	: ’24.  4. 22.

◦ 기본 및 시릿설계 용역 착수	: ’25.  7. 10.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

03		여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립

산업지원과 (☏ 061-659-3634)

실태		여수국가산단 노동자들 문화·복지시설 부족으로 삶의 균형확보 어려움
추진방향		여수국가산단 노동자들의 편의성 증대를 위한 복합문화센터와 공동세탁소를 건립
기대효과		여수국가산단 노동자 편익증진과 근로의식 고취

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수 국가산단 내 (여수시 주삼동 1038-1)

◦ 사업기간 : 2021. 6. ∼ 2027. 6.

◦ 사업규모 : 신축 2동[(본관)2,538㎡, (별관)355㎡]

◦ 사 업 비 : 123억원(국비 35, 도비 4.5, 시비 83.5)

◦ 공 정 율 : 23%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	123	60	4.5	58.5
국 비	35	3,5	-	-
도 비	4.5	-	4.5	-
시 비	83.5	25	-	58.5
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 복합문화센터 협약체결(산업단지공단)	: ’21. 7. 30.

◦ 사업 세부 추진계획 방침결정(1차 공동세탁소, 2차 복합문화센터)	: ’21. 9.  3.

◦ [공동세탁소]공사 착공	: ’22. 9. 14.

◦ [공동세탁소]공사 준공	: ’23. 4. 28.

◦ [복합문화센터]기본 및 실시설계용역 착수	: ’23.12. 6.

◦ [복합문화센터]설계안전성검토 보고서 조건부 적정	: ’25. 4.

◦ [복합문화센터]기술자문위원회 조건부 승인	: ’25. 6. 2.

◦ [복합문화센터]BF예비인증 완료	: ’25. 7. 2.

◦ [복합문화센터]재심의 결과에 따른 변경협약 체결(2차)	: ’25. 7. 3.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

04		오천산단 청년문화센터 건립

산업지원과 (☏ 061-659-3637)

실태		오천산단 문화·편의시설이 전무하여 지역 문화 활성화와 편의성 저해
추진방향		오천산단 청년문화센터 건립을 통해 문화인프라 및 편의시설 구축
기대효과		여수오천산단 노동자 편익증진과 근로의식 고취

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 망양로 477(現 오천조합사무실 / 소유토지 기부채납)

◦ 사업기간 : 2024. 8. ∼ 2027. 12.

◦ 사업규모 : 4층[대지 836.7㎡(253평) / 건축 460㎡(139평) / 연면적 1,519㎡(459평)]

◦ 사 업 비 : 57.2억원(국비 40, 도비 5.14, 시비 12.06)

◦ 공 정 율 : 30%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	57.2	-	-	57.2
국 비	40	-	-	40
도 비	5.14	-	-	5.14
시 비	12.06	-	-	12.06

□ 사업 진행상황

◦ 건립부지 기부채납 동의서 제출(조합→시)	: ’24. 2. 23. / 9. 26.

◦ 공모사업계획서 작성 용역 추진	: ’24. 4.∼6.

◦ 청년문화센터 공모신청 및 선정	: ’24. 6. 19. / 7. 2.

◦ 건축기본계획 수립	: ’24. 8.  1.

◦ 청년문화센터 협약체결(시↔한국산업단지공단)	: ’24. 8. 26.

◦ 행정절차 이행(투자심사, 공유재산심의 등)	: ’24. 9.∼11.

◦ 건립부지 기부채납 등기완료(조합→시)	: ’24. 11. 26.

◦ 공공건축 기획 용역 착수	: ’25. 2. 11.∼

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

05		K-관광 섬 육성사업

관광과 (☏ 061-659-3862)

실태		중장년층 중심의 관광객 구조에서 벗어나 섬의 주민들과 고유 콘텐츠를 활용한 특화 콘텐츠 및 인프라 개발 필요
추진방향		거문도 역사‧문화‧생태 자원을 활용한 K관광 상품 개발 및 저탄소 관광을 위한 친환경 관광시설 조성
기대효과		주민 소득 향상, 일자리 창출을 통한 지역경제 발전 및 환경보전을 통한 지속 가능 관광 실현

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 삼산면 거문도 일원

◦ 사업기간 : 2023. ∼ 2026.

◦ 사업내용 : 거문도 특화 관광콘텐츠 개발 및 편의 개선을 위한 인프라 조성

◦ 사 업 비 : 110억원(국비 55, 도비 16.5, 시비 38.5)

◦ 공 정 율 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	110	-	40	70
국 비	55	-	20	35
도 비	16.5	-	6	10.5
시 비	38.5	-	14	24.5

□ 사업 진행상황

◦ 2024년 전라남도 투자심사 자료 제출(조건부 2단계)  : ’24. 3. 20.

◦ K-관광 섬 육성 종합계획 수립	: ’24. 4. 8.

◦ 사무국 리모델링, 테마로드 실시설계 용역 추진	: ’24. 6.

◦ 플로깅 프로그램, 에코음악회 등 붐업 행사 운영	: ’24. 9. ~ 12.

◦ K-관광 섬 육성사업 주민회의 및 유관기관 회의추진	: ’24. 12. 10.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

06		사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업

관광과 (☏ 061-659-3881)

실태		□ 급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요
추진방향		□ 세계적인 공룡발자국 화석산지 등 천혜의 자연경관을 활용한 관광 콘텐츠 활성화를 위한 인도교 설치
기대효과		□ 인도교 설치를 통한 주변의 아름다운 자연환경과 어루러지는 지역의 랜드마크 교량 설치로 2026여수세계섬박람회 성공 개최 기여 및 지역주민의 쾌적하고 안전한 통행로 확보

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 화정면 낭도리 499-11번지 일원

◦ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 2026. 6.

◦ 사업규모 : 인도교(L= 894m, B= 3.0m)

◦ 사 업 비 : 360억원(도비 81, 시비 279)

◦ 공 정 율 : 10%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	360	11	1.5	247.5
도 비	81	-	1.5	79.5
시 비	279	11	-	168

□ 사업 진행상황

◦ 道 지방재정 투자심사 완료(조건부 2단계)	: ‘22. 12.  1.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: ‘23. 11. 30.

◦ 실시설계 사업비 산출 및 추진방침 보고	: ’24. 11.  1.

◦ 2025 중기지방재정계획 수정반영	: ’24. 11.

◦ 도시관리계획(도로) 결정(변경) 고시	: ’24. 12. 26.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

07		여수박물관 건립

문화유산과 (☏ 061-659-4524)

문화유산과 (☏ 061-659-4526)

실태		건축물 준공(100%) 및 전시물 제작·설치(25%)
추진방향		지역의 역사문화 보존 및 문화 정체성 확립
기대효과		우리시 역사·문화의 우수성을 관광자원으로 활용

사업개요

◦ 위    치 : 웅천동 1865-1(이순신공원 바위산전망대 앞)

◦ 사업기간 : 2018. 10. ∼ 2025. 11.

◦ 사업규모 : 5,605㎡(1동, 지상 1층)/ 부지면적 33,000㎡

◦ 사 업 비 : 317억원(국비 37, 도비 65, 시비 215) * 2023년 균특도비 전환

◦ 공 정 율 : 건축물 100%, 전시물 25%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	317	158.3	100.5	58.2
국 비	37	37	-	-
도 비	65	25	40	-
시 비	156.8	96.3	60.5	-
기 타	58.2	-	-	58.2	지방채

□ 사업 진행상황

◦건축설계 및 각종 행정절차 이행	: ’20. 12.∼’23. 8.

◦박물관 건립공사 및 관련 용역 착수	: ’23. 10.

◦박물관 전시물 제작·설치 및 관련 용역 시행	: ’25. 2.∼11.

◦박물관 건립공사 준공	: ’25. 6. 21.

◦박물관 누리집 구축 용역	: ’25. 6.∼12.

◦여수박물관 시운전	: ’25. 11.

◦여수박물관 개관	: ’26. 1.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

08		여수 선소테마정원 조성

문화유산과 (☏ 061-659-2105)

문화유산과 (☏ 061-659-2104)

실태		건축공사 추진 및 전시물 설계
추진방향		참여형 역사문화 콘텐츠 개발을 통해 역사적 자긍심과 정체성 강화
기대효과		문화교육 관광자원으로 활용하여 지역경제 활성화

사업개요

◦ 위    치 : 시전동 690번지 일원(선소유적 일원)

◦ 사업기간 : 2018. ∼ 2026.

◦ 사업규모 : 133,484㎡/ 선소테마영사전시관(연면적 3,859.7㎡/ 1동 지하 1층 지상 2층), 산책로(405m), 주차장, 한옥화장실

◦ 사 업 비 : 195억 원(도비 73, 시비 122)

◦ 공 정 율 : 40%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	19,500	5,724	3,010	10,766
도 비	7,275	2,200	1,500	3,575
시 비	6,125	3,524	1,510	1,091
기 타	6,600	-	-	6,100	지방채

□ 사업 진행상황

◦ 기본계획 용역 및 관광개발 타당성 조사 용역	: ’18. 1.∼11.

◦ 건축(기본, 실시) 및 전시(기본) 설계용역	: ’21. 10.∼ ’23. 6.

◦ 공사 계약 및 착공(건축 1차분)	: ’23. 12.

◦ 건축 1차분 준공 및 2차분 계약	: ’25.  2.

◦ 전기, 통신, 소방 2차분 착공	: ’25. 10.

◦ 건축 3차분 및 건설사업관리용역 3차분 착공	: ’25. 10.

◦ 전시물 제작설치 완료	: ’26.  7.

◦ 공사준공 및 시운전, 개관	: ’26.  8.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

09		여수시 어린이도서관 생활SOC복합화 사업

도서관운영과 (☏ 061-659-4777)

실태		어린이 복합문화공간 수요 급증 및 죽림지구 신시가지 개발
추진방향		영유아 및 어린이를 위한 전문화된 독서문화체험시설 확충
기대효과		아동권리 증진 및 아동친화도시 이미지 제고

□ 사업개요

◦ 위    치 : 전라남도 여수시 소라면 죽림리 1248번지(산들공원)

◦ 사업기간 : 2021. 11. ～ 2026. 6.

◦ 사업규모 : 대지면적 5,239.4㎡, 연면적 2,824.56㎡, 지하1층～지상3층

◦ 사 업 비 : 130.61억원(국비 6.25, 도비 37.27, 시비 87.09)

◦ 공 정 율 : 10%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	130.61	13.07	30.81	86.12
국 비	6.25	6.25	-	-
도 비	37.27	20.27	17	-	균특전환
시 비	87.09	17.36	26.73	43*	*지방채
기 타	0

□ 사업 진행상황

◦ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	: ’20. 11. ～ ’21. 3.

◦ 균특예산 및 생활SOC 복합화사업 신청․선정	: ’21.  2. ～ 10.

◦ 공공건축 기획 용역 및 사업계획 사전 검토	: ’21. 11. ～ ’22. 3.

◦ 통합설계 공모 및 기본․실시설계 용역	: ’22.  4. ～ ’24. 8.

◦ 행정절차 이행	: ’23. 6. ～ ’24. 12.

◦ 착공 및 준공	: ’24. 12. ～ ’26.  6.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

10		동백노인복지관 건립사업

노인장애인과 (☏ 061-659-3733)

실태		원도심권 노인분들의 여가활동 공간 부족
추진방향		원도심권 노인분들의 공간 부족 문제 해결을 위해 노인복지관 건립
기대효과		어르신들의 건강하고 활기찬 노후생활과 삶의 질 향상에 기여

사업개요

◦ 위    치 : 여수시 관문동 855번지

◦ 사업기간 : 2019년 ∼ 2026년

◦ 사업규모 : 연면적 2,138.74㎡(지상5층)/ 부지 2,257㎡

◦ 사 업 비 : 14,693백만원

◦ 공 정 율 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	147	542	0.03	92
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	147	542	0.03	92

□ 사업 진행상황

◦ 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진	: 2019.  2. ∼ 5.

◦ 건축기획 용역 추진	: 2021.  1. ∼ 6.

◦ 토지보상 협의	: 2021.  6. ∼ 2023. 12.

◦ 기본 및 실시설계 용역	: 2021. 12. ∼ 2024. 12.

◦ 지장물 철거공사	: 2023.  9. ∼ 2024.  2.

◦ 지방재정 투자심사 재심사	: 2024.  9. 27.

◦ 일상감사 및 계약심사 완료, 건축허가 취득	: 2024. 11.

◦ 동백노인복지관 착공	: 2024. 12. 11.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

11		장기미집행 공원 조성(무선산공원, 자산공원)

공원과 (☏ 061-659-4634)

실태		장기미집행공원 협의보상 지연으로 사유재산권 침해 및 도시공원 실효 위기
추진방향		토지보상을 위한 지방채 발행 등 충분한 예산확보로 사유 토지 신속 매입
기대효과		토지 매입을 통한 공원 조성완료로 사유재산권 침해 해소 및 주민편의 제공

□ 사업개요

◦ 위    치 : 2개소(무선산공원, 자산공원)

◦ 사업기간 : 2020. ～ 2027.

◦ 사업규모 : 토지보상 562필지 1,102천㎡ [무선산 243필지 875천㎡, 자산 319필지 227천㎡]

◦ 사 업 비 : 748억 원

◦ 공 정 율 : 무선산공원 80.6%, 자산공원 92%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	748	156	110	482
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	199	104		95
기 타	549	52	110	387	지방채

□ 사업 진행상황

◦ 무선산·자산공원 사유토지 감정평가(1차) 및 협의보상	: ’19. ～ ’20.

◦ 무선산 사유토지 재감정평가(2차) 및 협의보상	: ’22. ～ ’23.

◦ 지방채 179억 원(무선산 98, 자산 81) 발행 및 편성	: ’23. 2. ～ 12.

◦ 사유토지 재감정평가(무선산-3차, 자산-2차) 및 협의보상	: ’24. 2. ～ 12.

◦ 무선산·자산공원 사유토지 매입 보상협의(1～3차)	: ’24. 5. ～ 11.

◦ 지방채 370억 원(무선산 310, 자산 60) 발행	: ’25.  1.

□ 위치도
□ 전경사진(조감도)
무선산공원	자산공원

12		연등천 재해예방 사업

건설과 (☏ 061-659-4037)

실태		기후변화, 도시화 등 도시 홍수위험 증가
추진방향		둔덕저류지(36만톤) 설치에 따른 내‧외수 침수 방지
기대효과		사업 추진에 따른 도심하천 홍수방어 능력 획기적 증대

□ 사업개요

◦ 위    치 : 둔덕동 303-2번지 일원

◦ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 2026. 12.

◦ 사업규모 : 둔덕저류지(36만톤) 설치 1개소, 하천정비 1식 등

◦ 사 업 비 : 389억원(국비 195, 도비 58, 시비 136)

◦ 공 정 율 : 20%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	389	156	78	155
국비(전환)	195	66	45	84
도 비	58	22	13	23
시 비	136	68	20	48
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 지방하천 정비사업 국고보조금 확정 통보[국비 120억]	: ’18.  1. 29.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수[㈜삼안]	: ’20.  5. 11.

◦ 토목공사(총괄 및 1차분) 착공	: ’24.  6. 12.

◦ 건설사업관리용역(총괄 및 1차분) 착수	: ’24.  6. 18.

◦ 편입토지 등 보상 완료(166건)	: ’25.  2. 17.

◦ 토목공사(2차분) 착공	: ’25.  5. 15.

◦ 건설사업관리용역 1차분 준공 및 2차분 착수	: ’25.  7. 29.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

13		소제지구 택지개발

공영개발과 황보호 (☏ 061-659-4575)

실태		□ 국가산단 증설에 따른 신규유입 산단 종사자에게 주거지 제공 필요
추진방향		□ 경관이 탁월한 지역에 택지를 조성하여 양질의 주거지 제공
기대효과		□ 양질의 주거지 제공으로 외부 인구유출 방지

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 소호동 637번지 일원

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2026. 12.

◦ 사업규모 : 택지개발 417,654㎡

◦ 사 업 비 : 2,300억 원(공사비 663, 보상비 1,355, 기타 282)

◦ 공 정 율 : 55%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	2,300	1,758	344	198
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	2,300	1,758	344	198
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 택지개발사업 실시계획 승인․고시	: 1991. 12. 28.

◦ 개발계획 변경 승인	: 2018.  6. 21.

◦ 보상 열람공고	: 2019.  1. 24.

◦ 실시계획변경 승인	: 2020.  6. 25.

◦ 택지개발공사 착공	: 2021.  4. 28.

◦ 개발(실시)계획 변경 고시	: 2023. 12. 21.

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

14		경도 해양관광단지 진입도로 개설

도로과 정동섭 (☏ 061-659-4071)

실태		경도지역 관광객 증가로 연륙교 건설 필요
추진방향		신월동~야도~경호동 연결 왕복2차로 연륙교 신설
기대효과		이동성과 접근성 구축 및 관광객 증가에 따른 교통수요 해소

□ 사업개요

◦ 위    치 : 여수시 신월도~야도~대경도

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2027

◦ 사업규모 : 진입도로 L=1.351㎞, B=13.5m~19.3m(연륙교 1.0㎞)

◦ 사 업 비 : 1,340억원 (국비40% 536, 도비20% 268, 시비20% 268, 민자20% 268)

◦ 공 정 율 : 21%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	1,340	691	50	599
국 비	536	241	20	275
도 비	268	150	10	108
시 비	268	150	10	108
기 타	268	150	10	108

□ 사업 진행상황

◦ 경도해양관광단지 경제자유구역 지정·고시(산업부)	: ’17. 11. 22.

◦ 진입도로 반영 개발계획 변경 고시(산자부)	: ’20.  9. 17.

◦ 개발계획 변경 승인(전남도)	: ’23.  6. 22.

◦ 실시계획승인 고시	: ’23.  7. 27.

◦ 공사 착공	: ’23.  9.  4.

◦ 변경계약(인계·인수 지분율 조정 등)	: ’25.  3.  4.

* (당초) 남양58% · 금광30% · 삼호12% ⇒ (변경) 금광88% · 삼호12%

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

15		도성지구 농촌공간정비사업

농업정책과 임선진 (☏ 061-659-4429)

실태		폐축사 290개소(580동) 철거 및 토양오염으로 인한 농지복원이 필요한 상황
추진방향		폐축사 및 빈집 철거 등 유해시설 정비, 농지복원 및 주민 역량강화
기대효과		유해시설 정비를 통한 정주환경 개선 및 농촌공간 재생 도모

사업개요

◦ 위    치 : 여수시 율촌면 신풍리 41-26번지 일원(A=183,945㎡)

◦ 사업기간 : 2024. 10. ~ 2029. 12.

◦ 사업규모 : 유해시설(폐축사 290개소, 기타건축물 23개소) 철거, 농지복원 20,160㎡, 역량강화사업 1식 등

◦ 사 업 비 : 180억 원(국비 90 50%, 도비 27 15%, 시비 63 35%)

◦ 공 정 율 : 5%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	180	-	9	171
국 비	90	-	4.5	85.5
도 비	27	-	1.35	25.65
시 비	63	-	3.15	59.85
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 추가공모 신청(여수시→농림축산식품부)	: ’24.  8. 12.

◦ 공모선정(농림축산식품부)	: ’24.  8. 27.

◦ 위(수)탁 계약 체결	: ’24. 10. 29.

◦ 기본계획 수립 용역 착수 및 착수보고회 추진	: ’25.  1.  7.

◦ 폐축사 및 빈집 현황 등 기초조사 시행	: ’25.  2. ～ 4.

◦ 주민설명회 개최(1차)	: ’25.  4. 15.

- 기본계획수립 용역 기초조사 결과 및 사업 추진방향 설명

◦ 주민 추진위원회 구성, 사업동의서 징구	: ’25. 4. 15. ∼ 7. 31.

◦ 주민설명회 개최(2차)	: ’25.  6. 30.

- 현장조사 결과 보고, 추진 경위, 정비사업 방향, 주민 추진위원회 구성 현황 안내 등

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

16		지방상수도 현대화

상수도과 최영민 (☏ 061-659-4932)

실태		상수관 노후화로 인한 탁수 발생 빈도 증가
추진방향		노후관 교체를 통한 안정적인 용수공급 기반 확보
기대효과		20년 이상 된 노후관로 교체로 깨끗한 수돗물 공급 및 유수율 향상

□ 사업개요

◦ 위    치 : 관내 전지역

◦ 사업기간 : 2020. 11. ~ 2026. 12.

◦ 사업규모 : 관로교체 L=61.3㎞, 누수탐사 L=147㎞, 유지관리시스템 구축 등

◦ 사 업 비 : 51,353백만 원(국비 25,67750%, 25,67650%)

◦ 공 정 율 : 30%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	513.5	263.6	75.7	174.2
국 비	256.8	136.5	75.7	44.6
도 비	-	-	-	-
시 비	256.7	127.1	-	129.6
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 환경부 사전기술심의 완료(총사업비, 사업대상지 최종확정)	: ‘23.  1.  9.

◦ 기본 및 실시설계 완료	: ‘23.  5.  17.

◦ 관망운영 및 누수탐사용역 착수	: ‘23. 10.  4.

◦ 블록시스템 구축 및 관망정비공사 착수(총괄 및 1차분)	: ‘24.  1.  3.

◦ 블록시스템 구축공사 2차분 착공	: ‘24. 12. 24.

◦ 블록시스템 구축공사 1차분 준공	: ‘25.  7.  8.

□ 블록구축 및 관로교체 현황도

사업대상지

(관로교체 등)

17		도원사거리 일원 하수도정비 중점관리지역 정비사업

하수도과 류태원 (☏ 061-659-4991)

실태		저지대인 도원사거리 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 시 침수피해 발생
추진방향		하수도정비 대책에 따른 빗물펌프장 설치 및 관로 정비 등 추진
기대효과		침수피해를 예방하여 시민안전 확보 및 사유재산 보호

사업개요

◦ 위    치 : 여수시 학동, 선원동, 안산동 일원

◦ 사업기간 : 2021. ∼ 2026.

◦ 사업규모 : 빗물펌프장 300㎥/분, 유수지 3,000㎥, 관로정비 4.2km

◦ 사 업 비 : 21,432백만 원(국비 14,94670%, 시비 6,48630%)

◦ 공 정 율 : 50%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	214.32	163.53	26.39	24.40
국 비	149.46	109.88	17.98	21.60
도 비	-	-	-	-
시 비	64.86	53.65	8.41	2.80
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 중점관리지역 지정·	공고(환경부)	: 2017. 12.  4.

◦ 하수도정비 대책수립	: 2018.  3. ∼ 2019.  6.

◦ 기본 및 실시설계용역	: 2019. 11. ∼ 2021.  8.

◦ 공사 1차분 착·준공 및 2차분 착공	: 2021.  9. ∼ 2022.  6.

◦ 공사 2차분 준공 및 3차분 착공	: 2023.  5. ∼ 2024. 12

□ 위치도

□ 전경사진(조감도)

18		문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비

하수도과 위성현 (☏ 061-659-4981)

실태		문수주택 단지 합류식 관로 지역 존치로 하수 악취 등 민원 지속 발생
추진방향		합류식 관로를 우수, 오수 분류식 관로화를 위한 사업 추진
기대효과		분류식 하수관로 설치 및 정화조 폐쇄 등(634세대)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 전남 여수시 문수동 29-50 일원

◦ 사업기간 : 2021. 8. ∼ 2024. 5.

◦ 사업규모 : 관로(우·오수관) 신설 L= 8.6㎞, 배수설비 634개소

◦ 사 업 비 : 9,745백만원(국비 6,803 시비 2,942)

◦ 공 정 율 : 준공(100%)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2023년까지	2024년	2025년 이후	비 고
계	97	85	12	-
국 비	68	63	5	-
도 비	-	-	-	-
시 비	29	22	7	-
기 타	-	-	-	-

□ 사업 진행상황

◦ 재원협의(총사업비 확정) 통보	: ’21. 4. 29.

◦ 설치인가	: ‘21. 7. 13.

◦ 착공	: ‘21. 8. 9.

◦ 준공	: ‘24. 5. 14.

□ 위 치 도

□ 전경사진(조감도)